2017. 숲 조성 사업 계획서

00초등학교

1		필요성

숲을 체계적으로 정비하여 생태맹 극복을 위한 자연친화적인 학교환경조성과 다양한 환경놀이 체험 프로그램 구안을 통해 학년별 교육과정과 학교 숲 가꾸기 체험활동에 적용하여 자연의 소중함을 배우고 자연에 대한 바른 가치관과 고운 심성 함양이 필요함.

2		목 적

가. 학생, 학부모, 교직원 및 지역주민과 함께 하는 숲 프로그램을 운영하여 생명존중 및 생태감수성 함양에 기여하고자 함.

나. 숲을 조성하고 관리하는 과정에서 학생, 교사, 학부모, 지역주민 등이 함께 참여·협력을 통한 지속가능발전교육의 중요성을 알고, 공동체의식과 자연친화적 생활태도를 함양하고자 함.

3		운영의 방향

가. 교육과정과 연계한 감숲 조성을 통해 기후변화 대응력 향상을 위한 교육 공간 확보 및 자연 환경에 대한 교육 기능 강화

나. 숲 조성 및 관리에 대한 구성원들의 공감대가 형성될 수 있도록 학교 숲 관련 연수 체제를 구축

다. 교사, 학생, 학부모, 지역사회의 요구를 충분히 반영한 학교 숲이 조성될 수 있도록 협의·협력체계를 구축하여 추진함으로써 학교와 마을이 상생하는 교육생태계를 구축

라. 숲 활용 프로젝트를 위한 다양한 환경놀이 체험활동을 구안하여 교육과정과 연계한 장∙단기적 계획 수립 및 반영함으로써 학생들의 생태감수성 및 인성 함양

4		세부추진 계획

가. 학교숲조성 추진위원회 조직                                                    (2017. 1. 9. 기준)

											총 괄					교 장
지원 기관											조 정					교 감						협조 기관
• 충청북도교육청 • 산림청 • 괴산군청																						• 충북 생명의 숲 운동본부, 문화학교숲 • 학교운영위원회, 학부모회 • 초등학교총동문회
											기 획					담당교사
운영 기획 분과								자료 수집∙개발 분과								실행 분과								평가 분석 분과
⁍ 요구 조사 ⁍ 조성 계획서 수립 ⁍ 연수활동 추진								⁍ 연수자료 수집 개발 ⁍ 교육자료 수집 개발 ⁍ 학교 숲 자료 수집								⁍ 학교 숲 조성 실행 ⁍ 교육 프로그램 전개 ⁍ 홍보활동 전개								⁍ 설문지 작성 ⁍ 설문 결과 분석
교무부장, 행정실장								방과후학교부장, 교무실무사								각 담임교사, 돌봄전담사								연구부장, 교과전담교사

나. 추진 기간 및 내용

순	추진 내용	추진 시기	참여대상	비 고
1	숲 조성 선진학교 시찰	2016.05.11.~12.26.	교장, 교사, 행정실	진천학성초, 삼보초
2	학교 녹지 환경 사전 조사 및 의견 수렴	2016.11.28.~12.21.	학생, 학부모, 교직원, 지역주민	학교 운영위원회
3	숲 조성을 위한 사전 협의회 실시	2017.01.05.	전교직원, 학생, 학부모, 지역주민, 총동문회 대표
4	숲 조성 사업 신청서 작성 및 제출	2017.01.02.~01.06.	담당자, 행정실
5	숲 조성 사업 안내 및 홍보	2017.01.23.~02.05.	전교직원 및 학부모, 지역주민
6	식재 계획서 작성을 위한 사전 조사	2017.02.02.~02.05.	전교직원
7	숲 조성을 위한 교직원 연수, 숲체험 및 환경놀이 프로그램 개발	2017.02.02.~03.11.	교직원	연구
8	숲 조성을 위한 학생 및 학부모 교육	2017.02.02.~03.11.	학생, 학부모	교무
9	숲 조성	2017.03.11.~05.30.	학생, 학부모, 교직원, 총동문회	담당
10	숲 활용 교육활동 전개	2017.04.02.~02.28.	학생, 학부모, 교직원, 총동문회, 지역주민	담당, 담임
11	숲활용 교육활동 평가	2017.07.01.~12.30.	학생, 학부모, 지역주민, 교직원	담당, 담임
12	숲 활용 차기년도 계획 수립	2017.11.01.~12.30.	학생, 학부모, 지역주민	담당, 담임

다. 학교숲 조성 예정지 안내도

라. 학교숲 조성 유형과 조성 예상 면적(안)

1) 조성장소의 개요

유 형		조성 장소	면적(㎡)	비고
	야외숲 (관찰탐구의 길)	➀ 느티나무 주변 마운딩후 느티나무동산(교목) 조성 ➁ 정문 옆 진입로 진달래꽃길(교화) 조성 ➂ 담장주변 넝쿨장미길 조성	600	∘ 기존 주차장 벽돌철거 이전 ∘ 바닥 정비 및 신규 숲조성 ∘ 배수로 정비
조성 예정지		➀ 느티나무동산 ➁ 진달래꽃길(교화) ➂ 넝쿨장미길
	미래숲 (사색의 길)	➀ 식물별 터널 조성 ➁ 식물 터널 옆 야생화 동산 ➂ 숲길 산책로 정비 ➃ 아린이들의 쉼터, 책읽는 글터’ 조성(도서비치)	840	∘ 식물 터널 설치, 초본류 식재 ∘ 기존 숲정비(마운딩, 배수로) ∘ 기존 주차장 철거 ∘ 쉼터에 도서대, 파라솔 설치
조성 예정지			➀ 터널아치 설치 ➁ 터널 좌, 우측 야생화 식재 ➂ 산책로 정비 및 문학작품 전시

유 형		조성 장소	면적(㎡)	비고
	화단숲 (힐링길)	➀ 꽃동산 조성	320	∘ 기존 화단 정비
조성 예정지			➀ 영산홍, 철쭉, 꽃잔디 식재 ➁ 광량과 식물의 성장 속도 등을 고려 하여 조화를 이루도록 구성
	비탈숲 (힐링길)	➀ 바람의 언덕 조성	260	∘ 비탈길 정비 ∘ 유실수 및 초본류 식재
조성 예정지			➀ 복수초, 메밀, 코스모스, 미니해바라기, 목화 군락 식재 ➁ 유실수(감나무, 매실, 살구, 복숭아, 배나무, 꽃사과나무 등) 식재로 사계절 꽃피는 아름다운 학교 조성
	모퉁이숲 (힐링길)	➀ 작은숲 조성 ➁ 동화속 행복씨앗놀이터 조성 ➂ 우리밀밭 조성 ➃ 오감만족 흙놀이터 조성	450	∘ 신규 작은 숲 조성 ∘ 벽화 배경 골조 설치, 나무 그네 및 벤치 ∘ 넝쿨 식물식재(능소화, 머루, 포도넝쿨) ∘ 우리밀 식재 및 황토 놀이터 조성
조성 예정지		➀ 운동장과 놀이터 사이 작은숲 ➂ 우리밀밭 조성 ➁ 벽화 활용 동화속 행복씨앗놀이터 ➃ 황토 흙놀이터 조성
		총 면 적	2,470(㎡)

마. 숲 활용계획

1) 교육과정 분석 및 재구성 계획

가) 교육과정 분석 내용

구 분	숲 보유가 필요한 식재		비 고
	교육과정과 관련된 나무와 꽃	식재 고려 필요
1학년	나무: 개나리, 벚나무, 진달래, 목련 꽃: 제비꽃	나무: 배나무, 사과나무 꽃: 채꽃, 메밀꽃, 튤립, 분꽃 해바라기, 나팔꽃	∘ 과실수 참고 ∘ 한해살이 화초 식재 고려 필요 ∘ 교실 내 재배
2학년	나무: 무궁화, 단풍나무, 소나무, 향나무, 은행나무, 밤나무, 산수유나무 꽃: 은방울꽃, 국화, 맨드라미, 강아지풀, 진달래	나무: 나무, 동백나무, 차나무, 석류나무, 가시나무 꽃: 봉선화(봉숭아), 코스모스, 나팔꽃	∘ 과실수 참고 ∘ 차나무 재배 환경 고려 ∘ 한해살이 화초 식재 고려 필요
3학년	나무: 조팝나무, 쥐똥나무, 장미, 느티나무 꽃: 상사화, 방울꽃	나무: 자작나무	∘ 자작나무 식재 고려 필요
4학년	나무: 단풍나무, 쥐똥나무, 등나무, 벚나무 꽃: 부들, 할미꽃, 연꽃, 비비추	나무: 감나무, 대나무, 생강나무 꽃: 부레옥잠	∘ 과실수 참고 ∘ 대나무 재배 환경 고려 ∘ 수생식물 재배 방안 고려
5학년	나무: 무궁화 꽃: 비비추, 제비꽃, 민들레	나무: 사과나무 꽃: 목화, 봉선화	∘ 과실수 참고 ∘ 목화 학교 텃밭 재배 고려 ∘ 한해살이 화초 식재 고려 필요
6학년	나무: 할미꽃, 담쟁이넝쿨 꽃: 붓꽃	나무: 배나무, 사과나무 꽃: 칸나, 봉선화	∘ 과실수 참고 ∘ 한해살이 화초 식재 고려 필요

나) 희망하는 나무와 풀

목본류(나무 이름)			초본류
상록교목	낙엽교목	관 목
소나무(조선소나무)	이팝나무(봄)	미스김라일락	벌개미취
황금소나무	회화나무(여름)	황금주목	봉선화
황금측백나무	자귀나무	미니백일홍	꽃잔디
반송	산딸나무	능수백일홍	상사화
코니카가문비	벚나무	배롱나무	돌단풍
주목	공작단풍나무	왜성(미니)배롱나무	양귀비
둥근주목	꽃사과	영산홍	금불초
	감나무	넝쿨꽃장미	산수국
	배나무	철쭉	메밀
	매실나무	진달래	감국
	대추나무	산수유	복수초
	복숭아나무	목화	삼지구엽초

다) 활용 방법

순	활 용 방 법	비 고
1	⁍ 2017학년도 학교교육계획 및 학년교육과정에 학년별, 교과별 연계방안 모색 ⁍ 전교생 중간활동 및 점심시간 활용 학교숲 둘레길 산책 및 1일 환경놀이체험 +70분 운동 ⁍ 유관기관의 협력을 통한 연중 학교숲 관리 체계 구축 및 실천	∘교육과정 설문분석 ∘환경놀이체험 +70분
2	⁍ 4월 과학 축제의 날 및 프로젝트학습 발표의 날 연계 학교숲 관찰대회 추진 ⁍ 교직원 대상 인근 지역 생태 탐방 실시 ⁍ 5월 한마음축제 시 가족사진 콘테스트 실시	∘학교행사 연계 학교 숲 프로젝트 활동
3	⁍ 학교사랑의 주간 중 학교사랑의 날 행사 진행 - 예쁜 새집 만들어 달아주기, 식물표본·도감 만들기 프로젝트(1~6학년) - 느티나무동산에서 학교전경 그리기(1~2학년) - 학교사랑 글짓기, 표어 등 문예대회(3~6학년) - 비즈쿨사업 연계 기업가정신 함양을 위한 숲 꿈 강연회 개최 - 인근 오성중학교와 함께 하는 초∙중 연계 숲 체험활동 전개	∘교육과정 연계 학교사랑주간 활용 ∘교육과정 연계 환경탐구프로젝트학습 전개(학습용 식물표본, 식물도감 만들기)
4	⁍ 창의∙인성교육 중심 사랑숲동아리 활동 주제로 활용 - 숲사랑동아리, 관찰탐구동아리, 과학발명동아리, 비즈쿨동아리 등 창체 8시간 확보 - 학교숲 연계 유관기관과의 생명숲교육 및 체험 활동 전개: 학생 및 참여희망 학부모 참여희망 지역주민 대상 생태맹 극복을 위한 환경교육 및 환경놀이 체험 - 동아리 활동 결과 발표회(10월중)에 학부모 및 지역주민 참여 - 동아리별 텃밭 운영 및 야생화 관리지정: 1인 1花 1木 갖기 운동 추진 학생 1인 1 야생화 관리 학생 1인 1 나무 가꾸기 지정 - 행복씨앗학교 준비교 연계 다양한 생태 체험 학습 실시	∘4월 식목행사에 구체적 실천 방법 반영
5	⁍ 학교숲 학년∙학급별 식물관련 시 낭송회, 시화전, 식물그리기 축제 개최 - 문학작품 교과연계 교육활동(연 4회)	∘식물관련 동시 등 문학작품 게시활용
6	⁍ 학교숲속 행복축제(9월중) - 가족사랑 마당, 학교숲, 넝쿨장미, 메밀꽃과 함께하는 사진전 및 사진첩 전시회 개최 - 학교숲 전문강사 강연회 및 컨설팅 개최(학생, 학부모, 지역주민 참여)	∘4.15.까지 전교학생회 중심 의견 수렴 및 계획 수립
7	⁍ 유네스코학교 관련 지속가능발전교육관련 전교생 학교숲활용 생태이해교육 실시 ⁍ 유치원, 전교생 대상으로 연중 숲체험 방과후학교 프로그램 운영	∘3.4.까지 계획 점검 및 고려사항 반영
8	⁍ 학교교육설명회 시 의견 수렴 및 홍보(3월, 9월 예정) - 학교설명회시 학부모 대상 2017.학교숲 조성 사업 추진 현황 보고 및 의견 수렴 - 행복씨앗나눔활동 전개 연 2회 이상 실시: 학교, 마을에서 채종 씨앗 나누기활동 - 학부모 대상 학교숲 연수 연 2회 이상 실시	∘3.2.학부모, 학생 대상 설문조사 발송 및 행사 시 내용 반영
9	⁍ 학교숲 조성 사업 관련 홍보활동 강화 - 학교숲 조성 및 활용에 대한 학교홈페이지, 가정통신문 등 활용 다양한 의견 수렴 - 괴산전통5일장, 감자축제, 괴산고추축제, 유기농축제 등 지역축제을 활용한 학교숲동아리 및 예술동아리 연계 행복씨앗학교 홍보 및 행복씨앗나눔활동 전개 - 학교숲 조성 추진 현황 및 프로그램 전개에 대한 언론보도 및 홍보활동 강화	∘학생동아리 등 민주적인 자치활동으로 학생중심으로 추진
10	⁍ 학교숲 조성 사업에 대한 계획 수립(3월 초) 완료 후에도 지속적인 피드백 실시 및 반영 ⁍ 학교숲 활용 생명존중교육 분위기 확산 및 학생, 학부모 대상 방과후학교 학교숲활용 및 생태이해교육에 대한 지속적 평가 체제 구축	∘학교숲 조성 및 유지 관리, 평가에 대한 피드백

5		예산편성계획(안)

세부사업	사업기간 (예정)	내 역	집행 내역		비고
			산출기초	예산액
자연 학습 공간	2017.4.11. ~ 2017.4.22.	자연학습 관찰원	1,000,000원×1회=1,000,000원	1,000,000	곤충 및 동물 관찰용
		소 계		1,000,000
식재	2017.4.11. ~ 2017.4.22.	초본류 식재	10,000원×500종류=5,000,000원	5,000,000
		목본류 식재	50,000원×100종류=5,000,000원	5,000,000	느티나무동산 조성 바람의 언덕 조성 모퉁이숲 조성
		기타 식재비	1,000,000원×30회=30,000,000원	30,000,000	거름, 인건비, 소요물품 등
		설계비	500,000원×4회=2,000,000원	2,000,000
		포크레인	500,000원×10회=5,000,000원	5,000,000
		조경석	1,000,000원×5회=5,000,000원	5,000,000
		관리비	200,000원×10회=2,000,000원	2,000,000
		소 계		54,000,000
편의 시설	2017.4.11. ~ 2017.5.30.	정자	4,000,000원×1개=4,000,000원	4,000,000	자연학습공간, 쉼터
		벤치	500,000원×10개=5,000,000원	5,000,000	쉼터
		간이 쉼터	3,000,000원×1개=3,000,000원	3,000,000	동화속 쉼터 목조
		테이블	500,000원×2개=1,000,000원	1,000,000	자연학습공간
		모래놀이시설	3,000,000원×1개=3,000,000원	3,000,000	흙놀이터 조성
		소 계		16,000,000
기타 시설	2017.4.11. ~ 2017.5.30.	아치게이트	1,000,000원×3개=3,000,000원	3,000,000	미래숲터널조성용
		수목 이름표	30,000원×50개=1,500,000원	1,500,000	교육과정 연계
		학교숲해설판	700,000원×5개=3,500,000원	3,500,000	조감도 및 안내판
		소 계		8,000,000
숲 체험활동	2017.4.2. ~ 2018.2.28.	숲 체험활동	500,000원×2회=1,000,000원	1,000,000	학생, 학부모, 지역주민 참여 체험활동
		소 계		1,000,000
합 계				80,000,000

6		기대되는 효과

가. 숲 운영을 통한 자연 체험학습의 기회와 호기심과 감성을 자극하여 생태감성 발달을 돕고 쾌적한 생활환경을 제공함.

나. 마을과 함께하는 숲조성 및 활용 프로젝트를 통해 학부모의 학교교육에 대한 신뢰도 고취, 학교와 지역주민과의 유대 강화에 이바지할 뿐 아니라 생명존중교육 분위기가 확산될 것임.

다. 학생, 학부모, 교직원 및 지역주민 대상 다양한 숲 프로그램 운영으로 생태맹 극복으로 정서적 안정, 생태감수성 발달 등 유네스코학교인 00초만의 특색을 살린 지속가능한 사회가 구축될 것임.

라. 숲이 학생들에게는 창의인성교육 및 생태환경교육의 장으로 미래 핵심역량을 기르고, 학부모, 지역주민 등 마을공동체와 학교가 함께 참여·협력하여 홍보활동은 물론 만족도가 향상될 것임.